함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	행정관리과장
(경유)
제 목	설계변경에 따른 변경계약 의뢰

1. 우리 정수센터에서 시행 중인 『강북정수센터 천정텍스 철거 및 설치공사』의 설계변경에 따른 변경계약을 아래와 같이 요청합니다.

가. 계약건명 : 강북정수센터 천정텍스 철거 및 설치공사

나. 계약업체 : (주)만영건설  대표이사 안흥식

다. 계약금액

- 당초 : 금154,534,100원

- 변경 : 금149,600,000원(감4,934,100원)

라. 계약기간

- 당초 : 2014년 10월 22일 ~ 2014년 12월 10일

- 변경 : 변동 없음

마. 변경사유 : 물량 증감 및 보험료 등 정산

따로붙임 1. 설계변경 시행 및 심의위원회 개최결과 보고 각 1부.

2. 설계변경 내역서   1부.

3. 제비율 검증      1부.

4. 합의각서         1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	김동우		정수시설과장	안길찬		강북아리수정수센터소장	12/09 박기석
협조자
시행	정수시설과-2851	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 삼패동 171	/
전화	02-3146-5874	/전송	02-3146-5807	/	dwoo7@seoul.go.kr	/	대시민공개