문서번호	정수과-3590
결재일자	2014.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
임태섭		임건혁	12/09 박기석
협조

정수처리시설 청소용역 설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

강북아리수정수센터

(정 수 과)

정수처리시설 청소용역

설계변경(정산) 검토 보고

우리 센터에서 시행한 정수처리시설 청소용역 설계변경(정산) 사항에 대한 검토결과를 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 강북아리수정수센터 정수처리시설 청소용역

○ 용역개요

- 주벽 청소 217,696㎡, 슬러지 청소(침전) 1,452㎥, 슬러지 청소(농축) 3,530㎥

- 정수지 청소(주벽) 19,797㎡, 정수지 청소(바닥) 17,200㎡, 상등수 이송 2회

○ 용역기간 : 2014.03.13. ~ 2014.12.20.

○ 도급금액 : 156,056,410원

□ 설계변경 검토

○ 물량 증감에 따른 설계 변경

- 물량변동사항

구 분	단위	당 초	변 경	증, 감
주 벽 청 소	㎡	214,955	217,696	증 2,741
슬러지 청소	㎥	5,042	4,982	감 60
정수지 청소	㎡	31,753	36,997	증 5,244
상등수 이송	회	2	2	-

○ 보험료 정산에 따른 설계변경

- 사후정산 대상 보험(국민건강보험, 국민연금보험, 노인장기요양보험)에 대한 납부금액 정산 및 제비율 반영

○ 설계변경 내역

- 도급비 변경 현황

구 분		금 액		증감	비 고
		당 초	변 경
총용역비		156,056,410	155,797,400	-259,010
도급액	공급가액	141,869,464	141,634,000	-235,464
	부 가 세	14,186,946	14,163,400	-23,546
	계	156,056,410	155,797,400	-259,010

□ 조치계획

○ 작업지시에 대한 작업완료 물량 및 사후정산 대상 보험료 납부금액 정산사항을 반영한 변경사항으로 이에 따른 설계변경을 시행하고자 함

따로붙임 : 1. 설계변경(정산) 내역서 1부.

2. 제비율 검증결과 1부.

3. 설계변경 심의회 개최결과 1부.  끝.