투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	미래숲주식회사 대표 김무회
(경유)
제목	'산림치유등산로 정비공사' 실정보고 검토결과 회신

1. ‘실정검토사항 제출’(미래 제2014-021호, 2014.12.3.)건과 관련입니다.

2. 귀사와 계약체결하여 시행중인 ‘산림치유등산로 정비공사’와 관련 제출하신 실정보고건에 대한 검토결과를 아래와 같이 회신하오니, 공사에 반영하고 조속한 시일내 변경계약 등 절차를 이행하도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고 검토의견

구 분	주 요 내 용	비 고
목재휀스 이설	철거대상 목재휀스 현장내 재활용	승 인
진입로 성토	성토높이 조정	승 인
축대목	축대목 높이 인상, 횡목 추가물량 반영	승 인
배수로	횡단배수로 추가 등	승 인
돌계단	메쌓기로 변경	승 인
세족장	위치변경	승 인
흙놀이장	상판 연식의자 곡선절곡	승 인

※ 제출된 공사비변경은 개략금액이므로 설계변경시 실시공물량으로 정산.  끝.

	서울대공원장
주무관	조진성		주무관	윤희숙		조경과장	12/10 이성주
협조자
시행	조경과-6531	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기도 과천시 대공원광장로(막계동) 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02)500-7511	/전송	02)500-7993	/	jsjo@seoul.go.kr	/	대시민공개