문서번호	시설보수과-8829
결재일자	2014.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
김발현		정재현	12/10 이승진
협조

북악터널 갱구부사면 보강공사 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

북부도로사업소

(시설보수과)

북악터널 갱구부사면보강공사 실정보고

공사현황

공 사 명 : 북악터널 갱구부사면 보강공사

공사개요 : 록볼트 및 숏크리트 752㎡, 계단식옹벽공(2.3.4사면) 587㎡,

기타 부대공  1식

공사기간 : 2014. 06. 03. ~ 2014. 12 .31.

도 급 비 : 1,070,000천원

도 급 자 : 에듀건설(주) 대표 곽위섭외 1

보고내용

1. 계단식 옹벽시공에 따른 공법검토

가. 추진경위

- 2014.09.30 : 공사추진에 따른 현안사항 검토

- 2014.10.17 : 기술검토위원회 심의 (시설관리공단)

- 2014.10.17 : 심의결과 및 시공계획서 제출(북부사업소→도로시설과)

나. 당초 설계내용

- 계단식 옹벽 + 영구앵카 공법 + 낙석방지책

다. 변경 검토내용

- V-cut + 유도배수관 + 숏크리트 + 하단부 화단조성(등나무 등 수목식재)

라. 변경사유 : 예산절감 및 미관개선

마. 공법변경 검토내용 및 세부 시공계획 : 따로붙임

2. 2013년 정밀점검 용역결과 5사면(하단옹벽포함) 및 대피소옥상          등의 방수층 파손, 낙석방지망 파손, 암절리면 발달, 옹벽 피복 콘크리트           의 들뜸, 철근 노출, 재료분리 등 전단면 열화현상이 발생되어 전반적          으로 보수공사 추가 필요(용역보고서 내용)

5사면 (낙석방지망 파손)	5사면 대피소 옥상 (방수층파손 및 배수로 훼손)	5사면 옹벽 전단면 열화(재료분리)

- 소요예산 : 153,000천원

3. 준공기한 연기 검토

가. 연기사유

- 정밀점검 용역결과에 따른 추가공사 기간이 소요되어 절대공기 부족.

나. 준공기한

- 당초 : 2014. 6. 3.~ 2014. 12. 31.

- 변경 : 2014. 6. 3.~ 2015. 02. 25.

다. 지체상금 부과여부 : 미부과 (귀책사유 : 서울특별시)

조치의견

추가 소요되는 공사금액에 대하여는 낙찰차액을 사용하여 추후 설계변경 시  반영하고, 추가공사에 따라 준공기한을 연기코자 함.

따로붙임  1) 공법변경 검토내용 및 세부 시공계획  1부.

2) 정밀점검용역사 보고서 등 관련문서      1부.  끝.