문서번호	기전과-9638
결재일자	2014.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전과장	동부도로사업소장
이귀섭	김대진	12/10 송상영

2014년 동부2구역

교통신호기 유지보수공사(연간단가) 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

동부도로사업소

(기 전 과)

2014년 동부2구역

교통신호기 유지보수공사(연간단가) 설계변경 보고

도로를 이용하는 시민불편사항 해소 및 안전사고 예방, 쾌적하고 안전한 도시환경을 조성코자 서울지방경찰청 규제사항 처리, 응답소 민원처리, 신호운영실 긴급출동 민원처리, 교통신호기 정비용역 순찰 점검사항 조치 등으로 인하여 발생된 작업지시사항에 대하여 설계변경을 시행코자 함

관련근거

교통운영과-19093호(2014. 10. 14)『2014년 교통신호기분야 사업추진을 위한 추가 예산배정 (효율적인 예산집행)』

교통운영과-18413호(2014. 10. 2)『소방관서 긴급차량 우선 출동시스템 구축계획』

㈜건영이엔씨 책임감리원(책임감리 교통운영과 계약)건영본14-12-05호       (2014. 12. 9)의거 제 2회 설계변경 요청

공사현황

공사명 : 2014년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

공사개요 : 송파구 교통신호기 유지관리 1식

(제어기 234대. 신호등 3,536등, 음향신호기 512대 등)

강동구 교통신호기 유지관리  1식

(제어기 159대. 신호등 2,657등, 음향신호기 478대 등)

공사기간 : 2014. 3. 21 ~ 2015. 2. 28

계약금액 : 463,991천원

계 약 자 : 주요이엔씨(주) 대표 박 영권

주요설계변경 내역

1차 ~ 4차 작업지시 설계변경 및 기성지급(275,220천원)

5차 작업지시 완료 : 20,493천원

- 신호등 3면 ⇒ 2면으로 수량 조정

- 경찰서와 협의 된 신호등 235개 철거

6차 작업지시 완료 : 194,602천원

- 서울지방경찰청 규제사항처리 4건

- 응답소 민원처리 9건

- 신호운영실 긴급출동 : 7건

- 교통신호기정비용역 순찰 : 8건 등

7차 작업지시 예정 : 100,705천원

- 소방관서 긴급차량 우선 출동시스템 구축 4개소

(강동소방서, 거여소방파출소, 암사소방파출소, 고덕소방파출소)

- 서울지방경찰청 규제사항처리

- 응답소 민원처리

- 신호운영실 긴급출동

- 교통신호기정비용역 순찰 등

설계변경 금액

(단위 : 천원)

공 사 명	계약금액	변경 계약금액				변경 금액 (증액)	비고
		계	기성금액 (1~4차)	작업지시금액 (5~6차)	작업지시예정금액 (7차)
2014년 동부2구역 교통신호기 유지 보수공사(연간단가)	463,991	590,480	275,220	214,555	100,705	126,489

설계변경 금액(증액분)은 2014년 교통신호기 분야 사업추진을 위한 추가예산(126,489천원)배정분으로 집행

보고자 의견

상기와 같이 설계변경을 시행하여 교통신호기 유지관리에 만전을 기 하고자 함

붙임 : 1. 변경설계서 1부.

2. 관련 공문 4부.  끝.