문서번호	도로보수과-6829
결재일자	2014.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
조경현		김승태	12/10 민승기
협조
	주무관		정규용

설계변경(정산) 검토보고

- 2014년 노후포장도로 정비공사(A구역) -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

남부도로사업소

(도로보수과)

설계변경(정산)검토 보고

『2014년 노후포장도로 정비공사(A구역)』의 공사물량 증  · 감 사항 및 제경비 실비정산에 대한 설계변경 검토 보고임.

Ⅰ			공사개요

공 사 명 : 2014년 노후포장도로 정비공사(A구역)

공사개요

▷ 절삭후 아스팔트 덧씌우기(t=5~12.5cm) A=1,571.5a

공사기간 : 2014. 5.14 ~ 2015. 2. 28

총공사비 : 2,412백만원

계 약 자 : 양정건설(주) 대표 양순석

Ⅱ			설계변경 사유

당초 정비계획구간 공사물량과 실시공 물량 차이에 따른 공사(포장)물량 증·감 발생

제경비 실비정산에 따른 건간보험료, 연금보험료 등 감액

Ⅲ			사업비 변동내역

구 분	당 초 (원)	변 경 (원)	비 고
계	2,412,271,000	2,405,259,000	감) 7,012,000
도 급 비	734,063,000	730,884,000	감) 3,179,000
관 급 비	1,658,208,000	1,674,375,000	증)16,167,000
이 전 비	20,000,000	0	감)20,000,000

Ⅳ			주요 물량변동 내역

공 종	규격	수 량(a)		증․감	비 고
		당 초	변 경
절삭후 아스팔트 덧씌우기	5cm	1,429.5	1473.7	(증) 44.2
	12.5cm	142.0	135.7	(감) 6.3

Ⅴ			조치의견

상기 보고내용으로 공사 시공물량 변경 및 제경비 정산을 별첨 내역과 같이 설계변경코자 합니다.

붙  임 : 설계변경(정산)내역서 1부.  끝.