내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰

우리과에서 시행중인 ‘한강상 교량 연결램프 구조개선(강북지역) 기본설계용역’에 대하여 다음과 같이 설계변경(정산)요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 한강상 교량 연결램프 구조개선(강북지역) 기본설계용역

2. 회 계 명 : 일반회계

3. 예산과목 : 도로건설, 간선도로망확충, 한강상 교량 연결램프 구조개선, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

4. 계약기간 : 2013. 5. 16  ~ 2014. 12. 26

5. 계 약 자 : ㈜도화엔지니어링 외 2개사

6. 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
계약금액	398,300,000	393,490,000	감 4,810,000	지반조사 및 자문비 실비정산에 따른 용역비 감액

따로 붙임 : 1. 설계변경 시행(품의서) 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 변경설계서(갑지포함) 1부.

4. 설계변경 보고서 1부. 끝.

	도로계획과장
전문관	정용훈		도로정책팀장	이승석		도로계획과장	12/10 형태경
협조자
시행	도로계획과-16202	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110 도로계획과 10층	/
전화	02)2133-8067	/전송	02)2133-0763	/	hoon0916@seoul.go.kr	/	대시민공개