투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	폐기물처리용역 준공기한 연기 의뢰(율곡로)

1. 우리부에서 시행중인 『율곡로창경궁앞도로구조개선공사 건설폐기물처리용역』와 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사 건설폐기물처리용역

나. 용역금액 : 483,890천원

다. 용역기간 : 2011. 3.23. ~ 2015. 6.30.

라. 용역업체 : ㈜장형기업

마. 예산과목 : 도시안전실 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충, 율곡로도로구조개선, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 준공기한 연기내용

구 분	도급금액 (천원)	공 사 기 간		비 고
		당 초	변 경
전체분	483,890	2011. 3.23 ~ 2015. 6.30	2011. 3.23 ~ 2015. 6.30	변경없음
2차분	150,000	2013. 3. 1 ~ 2014.12.31	2013. 3. 1 ~ 2015. 2.28	증59일

사. 준공기한 연기사유 : 토목공사의 공사기간 연장으로 인한 건설폐기물처리 용역기간 연기

아. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박천용		광역도로과장	최광무		토목부장	12/10 노우성
협조자
시행	토목부-24550	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2558	/전송	02-3708-2599	/	park8370@seoul.go.kr	/	대시민공개