투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	우이신설 민간투자사업 시스템감리단장
(경유)
제목	우이~신설 실시계획(변경) 승인 알림 및 공정관리 철저

1. 관련

가. 우이(공사) 제2014-901호(14.10.31)“우이신설공기연장 공정표 제출”

나. 우이(공사) 제2014-965호(14.11.19) “실시계획(변경) 승인 요청”

2. 우리본부에서는 사업시행자가 2014.11.19. 승인요청한 ｢우이~신설 도시철도 민간투자사업｣ 실시계획 변경(12차) 건에 대하여 아래와 같이 조건부로 승인하였음을 알려드리니, 귀 감리단에서는 사업시행자와 협의하여 적정 상세공정표가 적기에 제출될 수 있도록 필요한 조치를 취하시고 공사지연이 발생되지 않도록 공정 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

구 분	승 인 조 건
우이~신설 시스템분야	·첨부된 공정표(A4중1매)는 2014.9.12. 주무관청과 민자사업자간 합의한 26.5개월 공기연장 기간내 완료하는 계획임 ·상세공정표는 2011.6.1. 실시계획 변경승인시 첨부된 예정공정표 양식으로 토목, 건축 및 시스템감리단이 합동 확인 후 공정관리 할 수 있도록 차회 기성검사 전까지 우리부로 제출

※ 실시계획 변경(12차) 주요내용 : 총사업비 조달계획 및 예정공정표 변경

붙임 : 1. 관련공문 사본 각 1부.

2. 우이~신설 도시철도 민간투자사업 실시계획승인서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김한수		신호과장	김영하		도시철도설비부장	12/10 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-11430	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산 5-85 서울시청 남산별관 4층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7327	/전송	02-772-7308	/	hansvii@seoul.go.kr	/	대시민공개