문서번호	토목부-24545
결재일자	2014.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
최진우		김영수	12/10 노우성
협조

북단IC 분류하수관 보호공 말뚝공사 정산 고

《 월드컵대교 건설공사 》

2014.12.

도시기반시설본부

(토    목    부)

북단IC 분류하수관 보호공 말뚝공사 정산보고

《 월드컵대교 건설공사 》

공사현황

❍ 공사규모 : 폭 31.4m(6차로), 연장 1,980m

❍ 공사기간 : 2010. 3. 22 ~ 2015. 8. 22

❍ 공 사 비 : 176,063백만원

❍ 시 공 사 : 삼성물산(주) 외 2개사

❍ 감 리 단 : (주)포스코엔지니어링 외 1개사

보고내용

❍ 관련근거 : 월드컵감리 2014-413호(2014.12. 5.)

❍ 북단IC Ramp-C 신설을 위한 기존 분류하수관 보호공 말뚝시공 완료에 따른 정산 보고임

- A, D구간 : 난지IC 교량 하부구간으로 협소하여 강관말뚝 수량 증가 또는 감소

동재하시험결과에 따라 말뚝길이 증가 (25.1→28.1m)

- E구간 : 하늘공원 연결교량 하부구간으로 작업범위 조정으로 말뚝 수량 감소

구 분		당 초		변 경		증 ․ 감	비고
		복합말뚝	강관말뚝	복합말뚝	강관말뚝
일반	C구간	458	-	458	-	없음
	A-2 BOX	4	-	4	-	없음
	B구간	150	-	150	-	없음
	B-1 BOX	10	-	10	-	없음
협소	A구간	120	46	110(감10공)	40(감 6공)	감 16공
	D구간	110	-	107(감 3공)	13(증13공)	증 10공
	E구간	66	32	55(감11공)	17(감15공)	감 26공
계		918	78	894(감24공)	70(감 8공)	감 32공

감리단 검토의견

❍ 북단IC Ramp-C 신설을 위한 분류하수관 보호공 기존교량 하부(협소 A,D,

E구간)의 일반구간(복합말뚝)과 협소구간(강관말뚝)의 작업범위를 조정하여 고가인 강관말뚝 수량을 감량하고, 각 위치별로 동재하시험결과 반영, 실제관입된 길이만큼 정산함이 타당함

❍ 공사비 현황

			(단위:천원)
구분		공 종		단위	당 초		변 경		증 감		비고
					수량	금액	수량	금액	수량	금액
도급비		복합 말뚝	말뚝항타	공	918	5,828,432	894	5,670,226	-24	-158,206
			두부보강	공	918	314,365	894	305,852	-24	-8,513
		강관 강관	말뚝항타	M	1,958	958,650	1,885	966,796	-73	8,146
			두부보강	공	78	26,677	70	23,941	-8	-2,736
		기타(시험비등)				87,694		86,912		-782
공 사 비						7,215,818		7,053,727		-162,091
부 가 세						721,582		705,373		-16,209
합 계						7,937,400		7,759,100		-178,300

조치계획

❍ 책임감리원이 제출한 북단IC 분류하수관 보호공 말뚝공사 정산 실정보고에 대하여 내용검토한 바 타당하기에 우선 시공한대로 설계변경토록 업무지시하고 설계변경심의위원회 심의를 득한후 도급비에 반영하여 공사추진에 만전을 기하고자함.

- 감액 공사비 : 178,300천원

붙  임 : 감리단 공문 1부.  끝.