내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약변경 의뢰[청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)]

우리과에서 시행 중인 『2014년도 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 신규공정 및 시공물량 증․감에 따른 설계변경 사항이 발생되어 아래와 같이 계약변경(3차) 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년도 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014. 3. 2 ~ 2015. 2. 28

다. 계약금액 : 금247,104,000원

라. 계 약 자 : ㈜거 산     대표  엄재룡

마. 변경금액  : 금 326,898,000원, 증)79,794,000원

구 분		당초금액	변경금액	증․감	비고
총공사비		247,104,000원	326,898,000원	증)79,794,000원
도급비	공급가액	224,640,000원	297,180,000원	증)72,540,000원
	부 가 세	22,464,000원	29,718,000원	증)7,254,000원
	계	247,104,000원	326,898,000원	증)79,794,000원

바. 예산과목

- 행정국총무과,행정지원체계강화,청사관리,시청사및영조물관리,시설비

사. 변경사유

- 신규공정 발생 및 시공물량 증․감

붙  임 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 공사완료 현황(3차)

3. 설계변경 내역서(3차) 1부.

4. 합의각서 1부. 끝.

	총무과장
★주무관	이관호		시설관리팀장	최석기		총무과장	12/10 이혜경
협조자	계약1팀장	김점선
시행	총무과-33124	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110 서울시청 7층 총무과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-5651	/전송	02-2133-0771	/	kwanho67@seoul.go.kr	/	부분공개