함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경 시행에 따른 계약의뢰(누수복구2차)

1. 우리 사업소에서 시행중인 “2014년 서초․강남구관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)"에 대하여 설계변경을 시행하고 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 서초․강남구 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

나. 도 급 자 : 청파건설  대표 김종개

다. 계약기간 : 2014.6.12 ~ 2015.6.30

라. 설계변경금액 : 물량변경으로 계약금액 변경없음                (단위 : 원)

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증․감
도 급 비	1,548,300,560	1,548,300,560	변동없음

마. 차수별부기금액                                            (단위 : 원)

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증․감(원)
총부기금액	1,548,300,560	1,548,300,560	총부기금액 변경없이 물량변경
1차부기금액	1,200,000,000	601,854,000	(감)598,146,000
2차부기금액	348,300,560	946,446,560	(증)598,146,000

바. 설계변경 사유 : 신규공종 및 공종별 계약물량 증․감 발생

사. 예산과목 : - 상수도사업비,영업비용,배급수비,수선교체비,기타교체비

(상수도관 누수복구, 불용관정비)

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,일반운영비(사무관리비)

따로붙임 : 1. 설계변경 품의서 1부.

2. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계서갑지 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의서 1부. 끝.

	강남수도사업소장
주무관	송종학		시설관리과장	12/10 송근호
협조자
시행	시설관리과-25618	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울 강남구 양재천길 199(도곡동) -- 도곡동 459-4	/
전화	3146-4913	/전송	02-3146-4939	/		/	대시민공개