투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시시설관리공단이사(공사감독3처)장
(경유)
제목	업무지시(실정보고 3차 승인)

1. 공사감독3처-12385(2014.12.09)호와 관련입니다.

2. 『송정사근 빗물펌프장 증설 기계공사』와 관련 귀 공단에서 제출한 실정보고 사항은 펌프장 운영관리 기관인 성동구청 요구 및 현장 여건 등을 고려한 사항 임으로 성동구 관계자와 사전협의 추진하여 시공 하자가 발생하지 않는 조건으로 승인하오니, 특별히 시공 품질확보 및 안전에 유의하여 시행하여 주시기 바라며,

3. 또한, 실정보고에 따른 공사금액 증액이 3천만원 이상임으로 도시기반시설본부 설비부『설계변경 소위원회 심의(자문)』를 거처 설계변경 시행 대상 사업이므로, 2014년 회계년도 지출원인행위 마감기한인 2014년12월23일까지 행정절차상 설계변경 계약요청이 이루어질 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김경남		환경설비과장	12/10 이달영
협조자
시행	설비부-14080	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층 도시기반시설본부 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8629	/전송	02-3708-8659	/	knkim8@seoul.go.kr	/	대시민공개