문서번호	토목부-24539
결재일자	2014.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
최진우		김영수	12/10 노우성
협조

폐콘크리트 운반비 등 누락 검토보고

《 월드컵대교 건설공사 》

2014.12.

도시기반시설본부

(토    목    부)

폐콘크리트 운반비 등 누락 검토보고

《 월드컵대교 건설공사 》

공사현황

❍ 공사규모 : 폭 31.4m(6차로), 연장 1,980m

❍ 공사기간 : 2010. 3. 22 ~ 2015. 8. 22

❍ 공 사 비 : 176,063백만원

❍ 시공사 및 감리단 : 삼성물산외 2개사, 포스코엔지니어링 외 1개사

보고내용

❍ 관련근거 : 월드컵감리 2014-409(‘14.12.5)

❍ 수상구간 교각 공사와 관련하여 주경간 P11, P13 교각 철근․레미콘 자재 및 시공비가 집계오류로 수량이 누락되었으며, 주탑(P11) 우물통기초 이중가물막이 철거시 발생하는 폐콘크리트 운반비용이 누락되어 추가 반영이 필요한 실정임

구 분	P11	P13
개 요 도	레미콘 누락 (수량산출서) 철근 누락 (①수량산출서) 철근집계 오류 (②도면철근집계표)	철근 누락 (도면) 및수량산출서)
도면 및 수량 산출서 누락	레미콘 256 ㎥, 철근 57.873 ton	철근 96.719 ton
도면 철근 집계표 오류	철근 62.701 ton	-

감리단 검토의견

❍ 실시설계시 수량산출 오류로 인하여 누락된 사항으로 철근․레미콘 자재비 및 시공비, 폐콘크리트 운반비를 반영함이 적정함

❍ 공사비 현황

	(단위:천원)
구분	규 격	단위	당 초		변 경		증 감		비고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
도급비	콘크리트 타설	㎥	3,134	83,699	3,387	90,469	253	6,770
	철근운반 및 가공조립	ton	413	262,776	618	393,152	205	130,376
	폐콘크리트 상차 1회	ton	946	706	1,891	1,413	945	707
	폐콘크리트 운반비	㎥			411	1,103	411	1,103
	순공사비			347,181		486,137		138,956
	부 가 세			34,719		48,663		13,944
	소 계			381,900		534,800		152,900
관급비	레미콘	㎥	3,165	287,025	3,421	310,240	256	23,216
	철 근	ton	438	335,562	655	502,119	217	166,556
	소 계			622,587		812,359		189,772
합 계				1,004,487		1,347,159		342,672

- 적용단가 : 기계약단가로 낙찰율 적용 (64.008%)

조치계획

❍ 책임감리원이 제출한 주경간(P11․13) 폐콘크리트 운반비등 누락 실정보고에 대하여 내용검토한 바 타당하기에 우선 시공토록 업무지시하고 설계변경심의위원회 심의를 득한후 도급비에 반영하여 공사추진에 만전을 기하고자함.

- 추가 공사비 : 342,672천원(도급비 152,900, 관급비 189,772)

붙  임 : 감리단 공문 1부.  끝.