투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행_2014년 노후포장도로 정비공사(B구역)

우리사업소에서 시행중인 「2014년 노후포장도로 정비공사 B구역」에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 노후포장도로 정비공사 B구역

나. 공사기간 : 2014. 5. 16 ~ 2015. 2. 28.

다. 도 급 자 : 대민공영(주)  대표 성명선

라. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	2,229,247,000	2,208,699,000	감 20,548,000
도 급 비	676,130,000	657,260,000	감 18,870,000
관 급 비	1,533,117,000	1,543,079,000	증 9,962,000
이설비및기타	20,000,000	8,360,000	감 11,640,000

마. 변경사유 : 물량 증․감 및 제경비 실정산에 따른 설계변경

바. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비및부대비, 시설비

붙임 1. 설계변경(정산) 내역서 1부.

2. 설계변경 방침서 1부.

3. 제비율검증 1부.  끝.

주무관	조경현		도로보수과장	김승태		남부도로사업소장	12/10 민승기
협조자	주무관	정규용		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-6830	(		)	접수		(		)
우	150-073	서울 영등포구 대림3동 도림로 145	/	www.seoul.go.kr
전화	3284-5451	/전송	842-1634	/		/	대시민공개