문서번호	급수운영과-30770
결재일자	2014.12.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수설비팀장	급수운영과장
양윤선		김태형	12/10 안재엽
협조

설계변경 보고서(동부수도사업소 광진구 상수도공사(장기계속 단가계약))

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12. 10.

설계 변경(2차) 보고서

(동부수도사업소 광진구 상수도공사(장기계속 단가계약))

『동부수도사업소 광진구 상수도공사(장기계속 단가계약)』 시행 중 신규단가 및 시공물량 증․감 사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경(2차)을 시행하고자 합니다.

1				공사현황

○ 공 사 명 : 동부수도사업소 광진구 상수도공사(장기계속 단가계약)

○ 공사규모 : D=13~300㎜, L=2,081m

○ 공사기간 : 2014.08.13. ~ 2014.11.21.

○ 도 급 자 : ***************

○ 도 급 비 : ************

2				설계변경 개요

○ 설계변경 사유 : 신규공종 및 시공물량 증･감 발생

- 신규공종 및 신규자재 발생

․ 신규공종 : 아스팔트 포장절단(야간) 외 52개 공종

․ 신규자재 : 보호통 보온재(신형) D=30mm 외 32개

- 시공물량 증･감 현황

․ 토공,부설공,포장공,부대공 : 아스팔트 포장절단 외 199개 공종

- 1차정산 시 보온재 작업차량비(부대공) 과다정산으로 감액조치

․ 작업차량비 295개소 →249개소(46개소) 감액

- 1차정산 시 동파방지 보온재(D=13mm) 누락으로 정산반영

․ 동파방지 보온재(D=13mm) 295개

3				공사비 변경 현황

구 분	당 초	변 경	증 ･ 감
공급가액	***********	***********	변경없음
부가가치세	**********	**********
도 급 비	653,784,050	653,784,050

4				보고자 의견

○ 상기사항에 의거 설계변경 사항에 대하여 타당성 여부 등을 심의하여 설계변경에 반영하고자 우리사업소 설계변경 심사위원회 개최 후 그 결과에 의거 설계변경을 시행하고자 합니다.

따로붙임 : 설계변경서 1부.  끝.