문서번호	토목부-24642
결재일자	2014.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		터널건설과장	토목부장		시설국장
박근우		권혁대	노우성		12/11 이광세
협 조
	주무관			홍상필

공사 준공기한 연기 검토보고

(방화대교 남단 접속도로 건설공사-10차)

2014. 12

도시기반시설본부

(토   목   부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 ■	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 ■ ( ) 없음 □

공사 준공기한 연기 검토보고

(방화대교 남단 접속도로 건설공사 - 10차)

『방화대교 남단 접속도로 건설공사(10차)』에 대한 준공기한 연기 검토 보고 임.

Ⅰ		관련근거

□ 방화 제2014-162호(2014.12.8.) “준공기한 연기원 검토보고(10차분)

Ⅱ		공사개요

□ 위    치 : 강서구 방화동 ~ 올림픽대로

□ 규    모 : 도로개설 L=3,021m, B=5.75m ~ 18.0m

(교량 756m, 터널 949m, 토공도로 1,316m)

□ 공사기간 : 총차 2005. 10. 05 ~ 2015. 10. 31

10차(금차) 2013. 2.25. ~ 2014.12.31.

□ 총사업비 : 109,807백만원[도급비 : 66,092백만원]

10차(금차) - 도급비 10,000백만원

□ 시 공 사 : 금광기업(주),   감 리 사 : ㈜삼보기술단

Ⅲ		추진경위

□ ‘05. 10. 5. : 공사착수(전체 및 1차)

□ ‘08. 5. ~ 09.12. : 터널 및 램프 확장에 따른 설계변경(1,2차)

□ ‘13. 2.25. : 1차 ~ 9차분 공사준공(터널 및 확장전 램프)

□ ‘13. 2.25. : 10차 공사 계약 및 착공

□ ‘13. 7.30. : 확장 D램프 전도사고 발생(공사중지)

□ ‘13.10.30. : 부분작업 재개 승인(시점부 부채도로 시공 재개)

□ ‘14. 6.25. : 확장램프 A,C 구간 도시계획 변경에 따른 보상완료

□ ‘14. 9.11. : 하부구조물 공사 재개 승인(고용노동부)

□ ‘14. 12월 현재 : 확장램프 A,C 구간 하부공 시공중(교각 기초)

Ⅳ		보고내용

□ 10차분의 주요공정은 확장램프(R-A1, C, L=242m) 설치이나 확장부 도시계획 변경에 따른 보상이 ‘14년 6월 완료되었으며

□ ‘14년 9월 고용노동부로부터 공사재개 승인(구조물 하부공) 되어 착공이 지연됨에 따라 절대공기 부족

□ ‘13년 사고이월 예산으로써 재이월이 불가한 바, ‘15년 2월말까지 연기조치하여 예산의 불용을 최소화하고자 함.

□ 10차공사 준공기한 연기 검토

○ 공사지연 일수 검토

구 분	지연일수	비고
- 주요구조물공사(A,C램프) : 12개월(365일) - 동절기 공사중지기간 : 2개월( 65일) (1회 : ‘13.12.25 ~ ’14. 2.28) - 사고로 인한 작업 중지일수(공제) : 3개월( 90일) (‘13.07.30 ~ 10. 30) - 하부공 공사재개승인 지연(공제) : 3개월( 78일) (‘14.06.25 ~ 9. 11) 지연일수 (365+90)-(90+78) = 8.7개월(262일)	8.7개월 (262일)

- 실공사 착수일을 감안한 공사 완료예정 : ‘15년 7월말

- 준공기한 연기일수 조정

· 10차 계약분은 사고이월 예산으로써 재이월이 불가

⇒ ‘15년 2월말까지 연기하여 집행 및 타절조치

· 10차 불용금액(약 50억원)은 15년 예산(78억원)에 반영

□ 10차 준공기한 연기

구 분	당 초		변 경		비고
	착공일	준공일	착공일	준공일
10차	2013.02.25	2014.12.31	2013.02.25	2015.02.28

○ 연기사유 : 용지보상 지연 및 하부공 공사재개 승인 지연

Ⅴ		조 치 계 획

○ 감리단 검토의견과 같이 용지보상 지연 및 하부공 공사재개 지연에 따른 공사기한 연기사유가 타당하므로

○ 10차분에 대해 준공기한 연기조치하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 감리검토의견서 1부.  끝.