투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기 요청(북악터널 갱구부사면 보강공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 「북악터널 갱구부사면 보강공사」의 준공기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 북악터널 갱구부사면 보강공사

나. 계약상대자 : 에듀건설(주) 대표 곽위섭외 1

다. 준공기한 연기

- 당초 : 2014. 6. 3. ~ 2014. 12. 31.

- 변경 : 2014. 6. 3. ~ 2015. 02. 25.

라. 연기사유

- 정밀점검 용역결과에 따른 추가공사 기간이 소요되어 절대공기 부족

마. 귀책사유 : 서울특별시

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1) 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2) 준공기한 연기 보고서 1부.

3) 계약 합의각서        1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
★주무관	김발현		시설보수과장	12/11 정재현
협조자
시행	시설보수과-8872	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 365-1	/	www.seoul.go.kr
전화	944-5460	/전송	945-5073	/	kbh04099@seoul.go.kr	/	대시민공개