투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약의뢰(2014년 동부1구역 교통신호기유지보수공사(연간단가)-제2회)

1. 우리사업소에서 시행중인 『2014년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 내역변경에 따른 계약금액 변경을 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014. 03. 21. ～ 2015. 02. 28.

다. 도 급 자 : 남영전설(주) 대표 박 귀옥

라. 설계변경 사유 : 감리단 건영본14-12-06호에 의거 설계변경

-물량 증감 및 내역변경에 따른 설계변경

- 국민건간보험료, 국민연금보험료 정산 등

마. 설계변경내역                                    단위:원

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	421,810,000	434,263,638	증)12,453,638
부가가치세	42,181,000	43,426,362	증) 1,245,362
공 사 비	463,991,000	477,690,000	증)13,699,000

바. 예산과목 :  교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선,  교통안전시설물관리,

교통신호기신설 및 보수, 시설비

별  첨 : 1. 설계변경시행 방침서 1부.

2. 변경설계서 1부.

3. 설계변경 보고서 1부.

4. 기타 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	이귀섭		기전과장	12/11 김대진
협조자
시행	기전과-9721	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동 2번지)	/	www.seoul.go.kr
전화	2040-0361	/전송	2040-0365	/	lksoub@seoul.go.kr	/	대시민공개