투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	우이-신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구) 변경계약 의뢰

1. 도시철도사업부-8383(2014.12.11)호와 관련입니다.

2. 우이-신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)과 관련하여 물가변동(제12회) 및 투입계획 변경으로 인해 다음과 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 우이-신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)

나. 계 약 자 : ㈜평화엔지니어링 외 2개사

다. 용역기간

구 분	당 초	변 경	비 고
총괄	2009.01.07. ~ 2017.01.31	변경없음
6차	2014.04.09. ~ 2015.03.04	2014.04.09. ~ 2015.02.07

라. 용역금액 조정 내역

(단위 : 원)
구분	당 초	변 경	증 ․ 감	사 유
총괄 (제16회)	3,797,000,000	3,827,470,000	증) 30,470,000	∘계약금액 : 증)30,470천원 ∘사유 - 물가변동 (증 30,470천원)
6차 (제3회)	548,000,000	548,000,000	-	∘계약금액 : 변경없음 ∘사유 - 물가변동 (증 30,470천원) - 투입계획 조정 (감 30,470천원)

마. 예산과목

- 신교통수단도입, 경전철건설사업, 우이-신설 지하경전철건설, 시설비및부대비, 감리비(400백만원)

- 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 공사장안전관리대책추진, 감리비(148백만원)

붙  임 : 1. 계약금액 조정 검토보고서 1부

2. 변경내역서(총괄 제16회) 1부

3. 변경내역서(제6차 제3회) 1부

4. 합의각서 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정영호		경전철2과장	이승우		도시철도사업부장	12/11 이은상
협조자	주무관	김정수		계약2팀장	홍연화
시행	도시철도사업부-8397	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산5-85	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7188	/전송	02-772-7305	/		/	부분공개(5)