문서번호	시설관리과-25719
결재일자	2014.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
최덕환		송근호	12/11 김광식
협 조

설계변경 시행보고

( 2014년 반포 배수지외10개소 항청소용역 )

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

강남수도사업소

설계변경 시행보고

우리 사업소에서 시행중에 있는  ″ 2014년  반포배수지외 10개소 항청소   용역 ″ 에   대하여 보험료 및 청소면적 감소등 변경사항이 발생하여   아래와 같이 설계변경 시행코자 보고함.

용역개요

❍ 공 사 명 : 2014년 반포배수지외 10개소 항청소용역

❍ 용역개요 : 청소면적 : 293,852㎡, 약품사용면적 : 58,976㎡

❍ 용역기간(총부기기간) : 2014. 4. 7 ~ 2014. 12. 30

❍ 용역금액 : 금251,303,760원

❍ 계 약 자 : 태명종합건설,  대표자 황명애

설계변경 사유 및 주요 세부내용

❍ 보험료 및 청소면적 감소에 따른 감액 : 31,313,442원

(용역원가기준)

1) 보험료 정산  : 감액)14,499,777원                     (단위:원)

구분(보험료)	국민건강	국민연금	노인장기요양	산재 및 고용
(계)
14,499,777(감)	5,104,677	8,583,506	367,941	443,653

2) 신설 배수지 미통수에 따른 항청소 미실시 : 감액)16,813,665원

▷ 신설 배수지 : 수서, 삼성, 봉은 배수지

- 배수 청소면적 : 29,550㎡ (감),  16,207,425원(감)

- 항 출입구 전실 청소 : 6개소(감),     606,240원(감)

※ 신설 배수지 통수 지연에 따른 청소면적 감소(용역원가기준)

변경금액 현황                         (단위:원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증․감
총용역비		251,303,760	208,197,000	감)43,106,760
도급비	공급가액	228,457,964	189,270,000	감)39,187,964
	부가가치세	22,845,796	18,927,000	감)3,918,796
	계	251,303,760	208,197,000	감)43,106,760

설계변경 심의회 개최

○ 심의일시 : 2014. 12. 11(목), 오후 15 : 00

○ 심의장소 : 강남수도사업소4층(시설관리과)

○ 위 원 장 : 시설관리과 과장 송근호

○ 심의위원 : 시설관리과 6급 이재윤, 급수운영과 6급 박종태, 공문수

○ 간    사 : 시설7급 송종학

○ 심의내용

- 설계변경 타당성 검토 : 타당함

-  물량 변동에 따른 계약단가 적정 적용여부 : 적정함

- 제잡비 적정 산정 및 적용의 적정성 : 적정

- 각종 제반규정 준수여부 : 준수

○ 심의결과 :

- 설계변경 시행 : 적정함

조치의견

○ 본 용역은  발주당시에 반영된 수서,삼성,봉은 배수지등 3개소에 대한 신설배수지 청소시행이 하반기까지 미통수로 청소가 불가하여 물량이 감소한 사항으로,

○ 자체 설계변경 심의를 개최한 결과 설계변경함이 적정하여 붙임 설계내역서에 의거 설계변경을 시행하고, 계약 부서인 본청 재무과에 변경계약 의뢰코자 함.

붙 임 : 가) 설계변경 심의 의견서. 1부

나) 설계변경 내역서 각1부.  끝.