문서번호	급수운영과-25478
결재일자	2014.12.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김선호		이병운	12/11 代이병운
협 조

공사근로자 노무비 청구(11월) 적정여부 검토 보고

(삼각지역~한강대교북단 송배수관정비공사)

2014. 12.

중부수도사업소

(급수운영과)

공사근로자 노무비 청구(11월) 적정여부 검토 보고

우리사업소에서 시행하고 있는 “삼각지역 ∼한강대교북단 송배수관정비공사” 계약업체인********************에서 공사근로자 노무비 청구서(11월)를 제출하여 적정성 여부 검토하고 그 결과를 보고 드림

☐ 관련근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(행정안전부 예규 제74호 2014. 2. 7)

제13장 공사계약일반조건 제7절 공사와 대가지급 결정

☐ 공사현황

○ 공 사 명 : 삼각지역 ∼한강대교북단 송배수관정비공사

○ 공사개요 : D=100∼600㎜, L=1,752m

○ 공사기간 : 2014. 06. 16 ~ 2014. 12. 12

○ 계약금액 :*************

○ 계약상대자 :*******************

☐ 노무비 청구 현황

(단위 : 원)

공사명	계약업체	직접노무비 내역
		계약내역서	청구금액
			청구총액	금회청구	기 지급액
삼각지역~한강대교북단 송배수관정비공사	******************	*********** ********	***********	********** ******	********** ********

☐ 검토내용

○ 공사근로자 노무비 청구서 상 근로자별 청구금액 산출 적정성

- 계약업체에서 근로복지공단에 제출한 근로내역 확인 신고서 검토결과 적정

○ 당월(11월분) 노무비 청구금액 적정성 여부

(단위 : 원)

계약업체	직접노무비 내역
	계약내역서	청구금액		지급비율		검토내용
		11월	누계	11월	누계
***** **** *******	*********** ********	**********	***********	*****	*****	적정

☐ 처리의견

○ 상기 검토 내용과 같이 계약업체인 (주)한국바텀애쉬건설에서 제출한 공사근로자 노무비 청구서에 대하여 검토한 결과 지급비율 (37.9%)이 작업공정률(11월기준 90%) 이내로 적정하게 청구됨에 따라 계약부서에 이와같은 내용을 통보코자 하며

○ 노무비 지급내역을 확인하여 미지급 사례가 발생시 시정지시 및 지방노동고용청에 통보하고자 함.

붙임문서 : 1) 공사근로자 노무비 청구서 1부.

2) 공사근로자 노무비 지급내역 1부.

3) 공사근로자 노무비 지급 명세서 1부.  끝.