투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사 전면책임감리용역 설계변경 계약(총차5회, 4차3회) 의뢰

도림천 상류 관악산 저류조 설치공사 전면책임감리용역에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약(총차5회, 4차3회)을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 도림천 상류 관악산 저류조 설치공사 전면책임감리용역

나. 도 급 비 : 1,918,969천원

다. 공사기간 : 2012. 1. 6 ~ 2015. 6.15

라. 도 급 사 : (주)신명건설기술공사

마. 예산과목

1) 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 관악산저류조 설치, 감리비(변경없음)

2) 도시기반시설본부, 도시기반시설관리(일반회계), 공사장 안전관리대책추진, 감리비

※ 금회 예산 감조정

바. 설계변경 내역

1) 총차 5회(기간변경 없음)

구 분		금 액			비 고
		변 경	변 경	증 ․ (감)
총공사비		1,918,969,000	1,878,143,000	(40,826,000)
도급비	공급가액	1,731,063,000	1,694,249,000	(36,814,000)
	부가가치세	173,106,000	169,424,000	(3,682,000)
	손해보험료	14,800,000	14,470,000	(330,000)
	계	1,918,969,000	1,878,143,000	(40,826,000)

2) 4차3회(기간변경 : 2014. 4. 5 ~ 2014.12.14. → 2014. 4. 5 ~ 2015. 1.22.)

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 ․ (감)
총공사비		622,872,000	582,046,000	(40,826,000)
도급비	공급가액	561,957,000	525,143,000	(36,814,000)
	부가가치세	56,195,000	52,513,000	(3,682,000)
	손해보험료	4,720,000	4,390,000	(330,000)
	계	622,872,000	582,046,000	(40,826,000)

붙임 : 1. 보고서 1부.

2. 설계변경내역서(총차5회, 4차3회) 각 1부.

3. 합의각서 2부(별송)  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	조동협		주무관	한종수		방재시설부장	12/11 임춘근
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	방재시설부-13151	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02-3708-8774	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개