시 행	설비부-14116
시행일자
수 신 자	내부결재

결재	주무관	환경설비과장	설비부장
	배수웅	이달영	12/11 박기형

설계변경 자문회의(소위원회) 심의결과(제22차)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			설비부-13927호				요청부서		시책사업과		심의일자		2014.12.11
공 사 명			동부간선도로 확장(2공구) 전기공사
공 사 개 요			공사규모				동부간선(녹천교~상계교) 3.2km 및 지하차도 2개소 (녹천, 도봉) 전기설비
			공사기간				총차:2008.12.29.～2015.12.30. (4차:2014.02.05~2014.12.31)
			감 리 사				㈜이산
			설 계 사				㈜천일기술단, ㈜이산
			시 공 사				태경이엘피(주) 대표 김평석
심의요청사유							∘ 3,000만원 이상 설계변경
<설계변경 사유> ○ 도봉지차하도 진입차단시설 추가 ○ 관급자재 변경(나트륨 → 메탈세라믹) ○ 기로등 기초변경 및 지장물 이설 반영 등
원설계자 의견
심의결과		조건부			붙임 심의위원 지적사항 보완 조건
심의결과 조치					· 심의위원 지적사항을 보완하여 설계에 반영조치
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위원장			이달영				간 사		배수웅
	위 원			곽용길				위 원		김두환
	위 원			이동기				위 원		이기철