문서번호	기전과-15458
결재일자	2014.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	기전과장
하호영	한영호	12/11 박재경
협 조
	주무관		하상철

겨울철대비

터널 및 지하차도 부점등 보수완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

강서도로사업소

기전과

겨울철대비 터널 및 지하차도 부점등 보수완료 보고

겨울철을 대비하여 우리사업소 관내 터널 및 지하차도의 조명등에 대한 부점등을 파악하여 보수 완료하고 결과를 보고합니다.

시설물 현황

❍ 터    널 : 5개소(화곡, 궁동, 작동, 항동생태, 범박)

❍ 지하차도 : 15개소(외발산, 공항, 개화, 등촌, 오목, 오금, 고척2, 구로, 구로역,

가마산, 신도림, 국회앞, 목동교서측, 오목교서측, 서울교접속교)

❍ 조명등 현황

총 계	터 널			지하차도			비 고
	소 계	차도등	보행등	소 계	차도등	보행등
5,617	2,049	1,709	340	3,568	3,212	356

부점등 보수현황

❍ 보수기간 : 2014. 11. 27(목) ~ 12. 09(화)

❍ 보수대상 : 부점등 177개소

❍ 보수완료 : 램프 및 안정기 교체 279개소(램프 198개, 안정기 81개)

※ 조사대비 수량변동 : 램프(41),안정기(61) 교체대상 증가

❍ 작업공정 : 차도 1차선 부분통제 후 부점등 교체작업 실시하고,

완료 후 다음 차선 부분통제 후 교체작업 실시

❍ 작업방법 : 자체인력(가로등반 4명, 터널,지하차도관리반 9명) 활용하여

부점등 보수 및 차량안내 교통신호

❍ 투입장비 : 가로등 보수차량 1대, 싸인보드 장착차량 1대

❍ 부점등 보수 세부내역

구 분	부점등수	작 업 일 시	교체수량
계	279개	2014. 11.27(목)~ 2014. 12.09(화)
외발산지하차도 공황지하차도 개화지하차도 오목지하차도	100	2014. 12. 02(화)13시~17시 2014. 12. 03(수)13시~17시	램프(74),안정기(26)
등촌지하차도 화곡 터널	61	2014. 12. 01(월)13시~17시 2014. 12. 08(월)13시~17시	램프(46),안정기(15)
궁동 터널 작동 터널	43	2014. 11. 27(목)13시~17시	램프(36),안정기(7)
국회앞지하차도 구로역지하차도 가마산지하차도 신도림지하차도	75	2014. 12. 04(목)13시~17시 2014. 12. 09(화)13시~17시	램프(42,안정기(33)

향후계획

❍ 안정기 등 교체폐품 수거 후 일괄 불용처리

❍ 램프, 안정기 등 보수용 예비자재 확보(구매)

❍ 터널, 지하차도, 주기적인 점검을 통한 부점등 현황 파악 및 교체 실시

❍ 소규모 교량 및 일반 가로등은 야간순찰을 통해 부점등 상태를

파악한 후 1~3일 이내 교체작업 실시.

붙임 : 1. 터널 및 지하차도 부점등 교체현황 1부.

2. 현장별 부점등 교체사진 1부.  끝.