투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	서울대공원 곤충관 간이스프링쿨러 소방공사 설계변경 시행

1. 시설과–7719호(2014.12.10.)와 관련입니다

2. 대공원 내 소방설비 시공 중인‘서울대공원 곤충관 간이스프링쿨러 소방공사’를 아래와 같이 설계변경 시행코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 서울대공원 곤충관 간이스프링쿨러 소방공사

나. 공사기간: 2014. 11. 17. ~ 2014. 12. 14.

다. 시 공 자: 이레소방건설㈜ 대표 차윤옥

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
총 공사비	34,446,310	37,755,780	증 3,309,470

마. 설계변경 사유: 현장 여건을 고려한 물량 증･감에 따른 변경

바. 예산과목: 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 동물사관리기능 및야생동물종보존, 공원안전시설보수및정비, 시설비(예비비)

붙임  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 변경 설계서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

주무관	박도원		주무관	조대복		시설과장	12/11 공헌구
협조자	주무관	김희준		총무과장	이경로
시행	시설과-7769	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 막계동 서울대공원 종합관리사무실 시설과	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7424	/전송	02-507-7230	/		/	부분공개