투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	우이신설경전철(주) 대표
(경유)
제목	실시계획변경(12차) 승인 관련 상세공정표 조속 제출 요구

1. 관련

가. 우이(공사) 제2014-965호(14.11.19)“실시계획변경(12차) 승인요청”

나. 우이(공사) 제2014-981호(14.11.27)“사전협의결과 처리계획 제출”

다. 도시철도사업부-7991호(14.11.28)“실시계획변경(12차) 승인”

2. 위 관련‘가’호와 같이 귀 사에서 요청한 “우이~신설 도시철도 민간투자사업”실시계획 변경(12차) 승인요청 건에 대하여 시스템분야는 주요공정이 연계되지 않고 시공순서가 모순되어 귀사와 사전협의를 거쳐 아래 조건부로 2014. 11. 28. 실시계획 변경(12차)을 승인하였습니다.

아         래   -

○ 상세공정표는 2011.6.1. 실시계획 변경승인시 첨부된 예정공정표 양식으로 토목, 건축 및 시스템감리단이 합동 확인 후 공정관리 할 수 있도록 차회 기성검사 전까지 제출

3. 한편 후속공종으로 공정지연이 예상되는 시스템분야 입장에서는 현실적인 상세공정표를 토대로한 체계적인 공정관리가 무엇보다도 필요한 바, 귀 사에서는 실시협약 제23조(공정관리) 및 우리부 위 승인조건에 따라 각 공구 감리단 및 건설사업단과 긴밀히 협의하여 합의된 적정 상세공정표를 조속히 우리부로 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	김한수		신호과장	김영하		도시철도설비부장	12/11 정찬웅
협조자	정보통신과장	이용기		설비공사과장	윤승범		설비계획과장	강재천
차량과장	황영일		시설전기과장	서태창		송변전과장	김형기
시행	도시철도설비부-11456	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산 5-85 서울시청 남산별관 4층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7327	/전송	02-772-7308	/	hansvii@seoul.go.kr	/	대시민공개