문서번호	대외협력과-7095
결재일자	2014.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	대외협력과장	경영관리부장	상수도사업본부부본부장
신왕근	김인철	정진일	12/11 정득모
협 조

『2014년 페루 찬차마요시 산라몬정수장 시설개선사업(ODA)』

준공기한 연기 보고

2014.  12.

상수도사업본부

(대외협력과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	계약에관한법률	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『2014년 페루 찬차마요시 산라몬정수장 시설개선사업(ODA)』

준공기한 연기 보고

서울시 대외협력기금으로 시행 중인 「페루 찬차마요시 산라몬정수장 시설개선사업(ODA)」에 대하여 PMC에서 준공기한 연기 요청이 있어  보고 드림

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 2014년 페루 찬차마요시 산라몬정수장 시설개선사업(ODA)

□ 계약기간 : ′14. 06. 09 ~ ′14. 12. 31

□ 계약금액 : 일금 삼억이천일십만원정(￦320,100,000)

□ 사업내용

- 산라몬정수장 건설(3,000㎥/일)

- 시공 책임감리

□ 용역업체(PMC) : ㈜한국종합기술 대표 이강록

□ 사업진행 현황

□ 선금급 지급(′14.08.04) : 128,040천원

□ 공정율(′14.12.08 기준) : 60%

- 산라몬정수장 건설(3,000㎥/일) : 60%

□ 정수장 건설을 위한 국산자재 페루 callo항 통관 진행 중

□ 준공기한 연기(PMC) 요청

□ 계약기간

- 당 초 :  ′14. 6. 9 ~ ′14. 12. 31(206일)

- 변 경 :  ′14. 6. 9 ~ ′15.  2. 28(265일)

□ 총 증가일수 : 59일

□ 준공기한 연기 사유

- 페루 지방선거에 따른 후닌주, 찬차마요시 행정절차 지연

- 시공을 위한 상수도 국산자재 페루 반입 시 무관세 통관을 위한 처리

절차가 복잡하여 많은 시간 소요

- 공사기간 중 11월 ~ 익년 2월 사이는 우기로 공사진행이 지연되고 있음

□ 검토 의견

□ 용역업체의 준공기한 연기 요청은 용역계약 일반조건 제7절 2조 가항에 따른

1조 다항의 “불가항력의 사유” 및 “계약상대자의 책임에 속하지 않는

사유로 인하여 지체” 된 경우에 해당되는 것으로 준공기한을 PMC에서 요청

한 대로 연기하는 것이 타당하다고 사료 됨

□ 준공기한 연기 기간 : 2015. 2. 28

□ 지체상금 부과여부 : PMC의 책임이 없으므로 지체상금 미부과

첨 부 : 1. PMC 준공기한 연기의뢰 공문 1부.

2. PMC 준공(납품)기한 연기의뢰서 1부.

3. 준공기한 연기사유서 1부.

4. 페루(후닌주) 기상청 자료 1부.

5. 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 1부. 끝.