투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기요청(합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사)

1. 우리본부에서 시행중인 합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 합정 외 1개소 빗물펌프장증설공사(2차)

나. 도 급 비 : 4,740,587,000원

다. 공사기간 : 2013.1.4~2016.4.30

라. 시 공 사 : (주)금강주택  대표 김충재

마. 공사기간 변경

구 분	도 급 비	공 사 기 간		비 고
		당 초	변 경
총 차	4,740,587,000원	'13. 1. 4 ∼'16. 4. 30	'13. 1. 4 ∼'16. 4. 30	변경없음
2 차	969,700,000원	'13. 12. 27 ∼'14. 12. 20	'13. 12. 27 ∼'15. 2. 20	증 63 일

바. 준공기한 연기

- 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 :

․ 중동빗물펌프장 추가공사(기존관사 리모델링)에 따른 2차공사 절대공기 부족

사. 예산과목 : 도시안전실 하천관리과, 수자원, 치수및하천관리, 수방대책

사업(일반회계),중동빗물펌프장 시설용량 증대,시설비

붙임 : 1. 준공기한연기방침서. 1부

2. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	한종수		치수시설과장	김흥근		방재시설부장	12/11 임춘근
협조자	계약1팀장	김점선
시행	방재시설부-13108	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 별관2동 2층 (서소문동 37)	/
전화	02 - 3708 - 8772	/전송	02 - 3708 - 8756	/	ggabii@seoul.go.kr	/	대시민공개