문서번호	치수과-4359
결재일자	2014.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
방호익		김용제	12/11 차광재
협조
	주무관		박정태

사토장 변경 검토보고

한강공원 나들목 증설공사(신청담)

2014. 12

『한강공원 나들목 증설공사(신청담)』

사토장 변경 검토보고

신청담 나들목 증설공사 도달기지 터파기 진행중 발생한 토사의 원활한 사토처리를 위해 사토장 변경에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 동감(신청담) 제14-35호(2014.12.09.)

- 사토장 변경 승인요청

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 강남구 청담동 107-1(영동대교 남단 하류)

○ 규    모 : 보행저전용 나들목 신설(육갑문 및 E/V 2개소 포함)

- 나들목 :  B=5.0m, H=3.5m, L=83.5m

○ 공사기간 : ‘13. 4. 25 ~ ’15. 12. 20

○ 총사업비 : 10,759백만원[도급비 : 8,410, 관급비 : 2,248, 이전비:100]

○ 감 리 사 : ㈜동일기술공사, ㈜수성엔지니어링

○ 시 공 사 : 한양개발㈜

Ⅲ		감리단 보고내용

○ 사토장 변경

① 변경사유

- 당초 사토장 사용기간 만료(2014.6.20.)에 따라 추가 사토장     선정이 필요함

② 사토장 변경 현황

구 분	당 초	변 경	비고
위 치	인천 서구 연희동,경서동,원창동 일대 청라국제도시 수변 조성(공촌천,심곡천)	인천 연수구 송도과학로 85 (연세대 국제캠퍼스 기반시설 조성공사)
운반거리	53.9㎞	63㎞	증9km
운반단가	13,060원/㎥	13,060원/㎥
도급비	187,404천원	187,404천원

구 분	단위	설계수량	기반출	잔여수량	비고
잔토운반	㎥	10,546	3,450	7,096

③ 반출수량

Ⅳ		검토의견

○ 감리원이 제출한 사토장 선정 관련 동의서 및 제반서류, 실사         확인 결과 적정하며,

○ 운반거리가 당초(53.9㎞)보다 증가(63㎞)하였으나, 당초 계약단가를 적용하여           반출하는 것으로 요청하였기에 타당하다고 사료됨.

Ⅴ		조 치 계 획

○ 감리단의 의견이 사토장 변경에 이상 없음으로 검토 보고된 바, 실정보고를 승인하고자 함.

붙임 : 1) 감리검토의견서 1부.  끝.