투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경시행(2014년 포장구간내 폐아스콘운반 및 처리용역)

우리사업소에서 시행중인 2014년 포장구간내 폐아스콘 운반 및 처리용역(연간단가)에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)시행코자 합니다.

가. 용역명 : 2014년 포장구간내 폐아스콘운반 및 처리용역(야간)-남부

나. 용역기간 : 2014.4.16 ~ 2015.2.28

다. 계 약 자 : (유)도성개발 대표 윤칠중

라. 설계변경(정산)내역

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증 감	비고
용 역 비	496,795,000	544,038,000	증 47,243,000

마. 변경사유 : 폐아스콘 처리량 증가(53,144톤 ⇒ 56,212톤)

바. 예산과목 : ① 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비 (446,688,000원), 증 원인행위 : 47,243,000원

②도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비(99,350,000원)

붙  임 : 보고서 및 설계변경(정산)내역서 1부.  끝.

주무관	정철식		도로보수과장	代정규용		남부도로사업소장	12/12 민승기
협조자	계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-6896	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울특별시 영등포구 도림로 145(대림동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02)3284-5442	/전송	02)842-1634	/	mjcs0005@seoul.go.kr	/	대시민공개