투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경시행(특별도로 교통안전진단 교통신호기 보완공사 -제 1회)

1. 우리사업소에서 시행중인 『특별도로 교통안전진단 교통신호기 보완공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 특별도로 교통안전진단 교통신호기 보완공사

나. 공사기간 : 2014. 06. 18. ～ 2014. 12. 30.

다. 도 급 자 : ㈜태림티이씨  대표 조  진

라. 설계변경 사유 : 감리단 도로교통공단(안)-44호에 의거 설계변경

- 물량 증감 및 내역변경에 따른 설계변경

- 국민, 연금보험료 정산 등

마. 설계변경내역                                    단위:원

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	118,653,537	169,272,728	증) 50,619,191
부가가치세	11,865,353	16,927,272	증) 5,061,919
공 사 비	130,518,890	186,200,000	증) 55,681,110

바. 예산과목 :  교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선,  교통소통안전관리강화,

도로교통소통개선, 시설비

별  첨 :  1. 변경설계서 1부.

2. 설계변경 보고서 1부.

3. 감리단보고서 1부.

4. 기타 1부.  끝.

주무관	이귀섭		기전과장	김대진		동부도로사업소장	12/12 송상영
협조자	주무관	이민호		계약1팀장	김점선
시행	기전과-9756	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동 2번지)	/	www.seoul.go.kr
전화	2040-0361	/전송	2040-0365	/	lksoub@seoul.go.kr	/	대시민공개