문서번호	급수운영과-31027
결재일자	2014.12.12.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
강재성		김광운	12/12 안재엽
협조

설계변경 보고서(2차)(2014년 동부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12. 11

동부수도사업소

(급수운영과)

설계 변경 보고서(2차)

2014년 동부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속)

『2014년 동부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사』 시행 중 신규공종 및 시공물량 증·감 사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경(2차)을 시행하고자 합니다

1				공사현황

○ 공 사 명 : 2014년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속)

○ 공사규모 :  아스콘포장 270a, 콘크리트포장 4a, 보도포장 11a

○ 공사기간 : 2014.05.22. ~ 2015.05.31

○ 도 급 자 : ************

○ 도 급 비 : ****************

2				설계변경 개요

○ 설계변경 사유 : 신규공종 및 시공물량 증･감 발생

- 신규공종 발생

· 보차도 경계측구(B=30cm) : 1개 공종

- 시공물량 증·감 현황

· 아스팔트 포장절단(100~150)주간 외 106개 공종

3				공사비 변경 현황

구 분	당 초	변 경	증 ･ 감
공급가액	1,701,047,637	1,701,047,637	변경없음
부가가치세	170,104,763	170,104,763
도 급 비	1,871,152,400	1,871,152,400

4				보고자 의견

○ 위와같은 실정으로 설계변경 사항에 대하여 타당성 여부 등을 검토 및 심의하여 설계변경에 반영하고자 우리사업소 설계변경 심사위원회 개최 후 그 결과에 의거 설계변경을 시행코자 합니다.

붙 임 : 설계변경내역서 1부.  끝.