문서번호	시설보수과-4792
결재일자	2014.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
김호규		박용선	12/12 송상영
협조
	교량보수과장		김환겸

준공기한 연기 검토보고

(석촌지하차도 긴급 정밀안전진단용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  12.

동부도로사업소

(시설보소과)

준공기한 연기 검토보고

Ⅰ		관련근거

▣ 한구연 제14-59(2014.12.11) “정밀점검용역기간 연장 요청”

Ⅱ		용역현황

▣ 용 역 명 : 석촌지하차도 긴급 정밀안전진단용역

▣ 용역기간 : 2014.09.01 ~ 2014.12.31

▣ 용역개요 : 석촌지하차도 1개소

▣ 도 급 자 : ㈜한국구조물안전연구원 대표 이채규

▣ 용 역 비 : 142,800천원

Ⅲ		준공기한 연기

▣ 준공기한 연기사유

- 긴급 정밀안전진단용역 시행중 동절기 시설물 손상여부 점검 및 유관기관 자료

검토와 기술심의 소요기간(40일)에 따른 절대공기 부족.

▣ 준공기한 변경

- 당 초 : 2014.09.01 ~ 2014.12.31

- 변 경 : 2014.09.01 ~ 2015.02.28.(58일 연장)

▣ 귀책소재 : 동부도로사업소

▣ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		향후계획

▣ 위와 같은 사항으로 계약부서인 재무과에 통보하여 변경 처리코자 함.

붙 임 : 관련공문 1부.  끝.