문서번호	도로보수과-11132
보존기간	년
결재일자	2014.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		도로보수과장
최정필		12/12 이규철
협조
	주무관		이상하

「2014년 노후포장도로정비 노면표시공사-서부」 설계변경(제1회) 검토보고

2014. 12.

「2014년 노후포장도로정비 노면표시공사-서부」

설계변경(제1회) 검토보고

우리사업소에서 시행중인 『2014년 노후포장도로정비 노면표시공사-서부』   시행중 포장도로 정비 추가예산 배정 등 포장도로 정비노선 추가공사와 관련

노면표시공사 물량 증가에 따른 설계변경 사항을 검토하고 그 결과를 보고 드림

공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2014년 노후포장도로정비 노면표시공사-서부

ㅇ 사업규모 : 차선도색 102,800m, 도로표지병설치 1,700개

ㅇ 공사기간 : 2014. 5. 12 ~ 12. 31

ㅇ 계약업체 : 리인건설  대표 김장우

ㅇ 공사비 : 419,680,750원

(도급비 200,094,750원, 관급비 215,586,000원, 이전비 4,000,000원)

설계변경 사유

ㅇ 포장도로 정비공사 물량 변경에 따른 노면표시 물량증가

ㅇ 제비율 정산

설계변경 내역서

ㅇ 설계변경 내역

구 분	설계변경 내역
	당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비	419,680,750	560,283,670	증)140,602,920
도 급 비	200,094,750	263,736,000	증)63,641,250
관 급 비	215,586,000	296,547,670	증)80,961,670
이 전 비	4,000,000	0	감)4,000,000

ㅇ 주요 수량변경 내역

주 요 공 종	단위	당 초	변 경	증.감	비고
차선도색	m	102,800	150,098	증)47,298
도로표지병	개	1,700	854	감)846

ㅇ 예산과목

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장

도로정비공사, 시설비및부대비, 시설비

조치계획

ㅇ 노면표시공사 물량 증가사항을 반영하여 설계변경 시행코자 합니다.

붙임 : 1) 설계변경내역서 1부.

2) 제비율 검증 결과 1부.  끝.