함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	(주)우이트랜스
(경유)
제 목	실시협약 이행(타인자본 최초인출선행조건)을 위한 협조요청에 대한 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우이(관리) 제2013-084(2013.4.23)호와 관련입니다.

3. 위 대호로 실시협약 이행을 위해 우리 시에 협조 요청한 사항을 검토한 바, 공기 지연 사유가 불가항력적 사유(법령 개정)에 의한 것이라고 주장하나,

4. 우리 시에서 검토한 바, 공기지연 사유는 불가항력적 사유(법령 개정)가 아닌 귀 사의 귀책으로 인한 것으로 판단되며 귀 사에서 이견이 있을 경우에는 「민간투자사업 추진 일반지침」과 실시협약에서 정한 규정에 따라 분쟁을 해결하고자 합니다.

5. 아울러 귀 사에서는 실시협약에 재원 조달이 사업시행자의 기본적“의무사항”으로 귀 사 책임 하에 추진하도록 되어 있고 재원조달 관련 일체 비용도 귀 사가 부담하여야 하므로 타인자본이 조속 인출되어 사업이 원활히 추진될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다. 끝.

								서울특별시도시기반시설본부장
★주무관							이희권				경전철계획과장					김성기					경전철추진반장					노우성					도시철도국장						신한철
도시기반시설본부장							05/09 조성일
협조자				법무담당관							정석윤
시행			도시철도설계부-3511										(						)		접수												(						)
우	100-250					서울시 중구 삼일대로 231(예장동 산5-85) 3층 도시철도설계부																/			http://subway.seoul.go.kr
전화		02-772-7151							/전송			02)772-7304					/	leehg8909@seoul.go.kr													/	대시민공개