문서번호	한양도성도감-11445
결재일자	2014.12.12.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
김종범		신추교	12/12 심말숙
협조

용역기간 연장 변경계획

(한양도성 안내판 디자인 보완 및 실시설계)

2014. 12.

한양도성도감

용역기간 연장 변경계획

한양도성 주변 안내표지판 개선 디자인 마련과 관련하여 전문가 자문을 실시한 결과, 완성도 높은 디자인 마련이 중요하다는 의견에 따라 용역기간을 연장하고자 함

□ 용역 개요

○ 용역명 : 한양도성 안내판 디자인 보완 및 실시설계 용역

○ 용역기간 : `14.7.23. ~ `14.12.17

○ 계약업체 : 재단법인 아름지기

○ 용역금액 : 18,920,000원(금일천팔백구십이만원)

□ 변경사항 : 계약기간 연장 (금액변동 없음)

변경전	변경후
`14.7.23. ~ `14.12.17	`14.7.23. ~ `15.2.20

□ 계약기간 연장 사유

○ 한양도성 주변 안내판 개선은 연차적인 정비 사업으로 최초 디자인 마련이 중요하며,

○  전문가 자문을 실시한 결과, 완성도 높은 디자인 마련이 중요하다는 의견에 따라 용역기간 연장이 필요함

□ 행정 사항

○ 계약기간 연장 변경계약 체결요청(재무과)

별도붙임 : 합의각서 1부.  끝.