문서번호	기전설비2과-4976
결재일자	2014.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전설비2과장	시설부장
이창훈	신용철	12/12 차광재

“암사초록길 사업효과성 분석 용역”조정 시행

2014. 12

한강사업본부

(시설부 기전설비2과)

“암사초록길 사업효과성 분석 용역”조정 시행

서울연구원(공공투자관리센터)에 의뢰한 “암사초록길 사업효과성 분석용역”에

대하여 서울연구원과 협의한 내용을 반영하여 조정 시행코자 함

□ 추진경위

○ 암사초록길 사업효과성 분석용역을 서울연구원에 의뢰(‘14.11.11)

○ 방문협의 2회(11/13, 11/25)

- 권용훈 박사(공공투자관리쎈터 조사2팀장), 김한준 연구원외 1

□ 협의내용

구 분		협 의 전		협 의 후		사 유
과업명		암사초록길 사업효과성 분석용역		망원초록길 사후평가 용역		과업 내용과 일치시킴
과 업 내 용		망원, 암사 초록길의 타당성 조사 포함	⇨	망원, 암사 초록길의 타당성 조사 제외		타당성조사가 완료된 사업임으로 불필요
		암사초록길 사업효과성 예측 포함		암사초록길 사업효과성 예측 제외		사업효과성 예측은 타당성조사와 같음
				만족도 설문조사 및 성과지표 모델설계 추가		효과성의 정확한 조사를 위하여 과업내용 보강
과 업 기 간		90일		8개월		이용만족도 조사의 신뢰도 확보를 위해 소요기간 확보 필요
과 업 비 용		38,522천원		45,000천원		만족도 설문조사비 등 추가 소요예산 필요

□ 조치의견

○ 서울연구원과 협의한 내용과 같이 용역내용을 조정 시행코자 함

□ 조치내용

○ 과업명을 과업내용과 일치하도록 변경

- 변경전 : 암사초록길 사업효과성 분석 용역

- 변경후 : 망원초록길 사후평가 용역

○ 용역비는 서울연구원에서 요구한 소요예산 반영

- 용역비 : 38,522천원 → 45,000천원(증6,478천)

○ 용역비 사용은 동일 사업인 망원초록길의 잔여예산(470백만원)에서 사용하고, 기 시행된 예산 및 예산과목 변경

구 분	용 역 비	예 산 과 목
변경전	38,522천원	한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 접근체계 개선, 암사초록길 조성, 시설비(100-401-01)
변경후	45,000천원	한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 접근체계 개선, 망원초록길 조성, 시설비(100-401-01)

○ 만족도 설문조사를 겨울에 시행 시 만족도 조사의 신뢰도 확보가 어려워 과업기간 연장 반영(90일→8개월)

○ 과업내용 조정

- 망원, 암사 초록길 타당성 조사는 기 완료 되어 재조사 불필요

- 암사초록길 사업효과성 예측은 타당성조사 내용과 동일함으로 제외

- 망원초록길 사후평가를 위한 만족도 설문조사와 성과지표 모델 작성 추가

□ 행정사항

○ 조정된 예산액과 과업내용을 총무과와 서울연구원에 계약의뢰

○ 조정된 예산액과 예산과목을 기획예산과 통보

붙임 : 1. 과업내용서 1부.

2. 용역 내역서 1부.  끝.