문서번호	급수운영과-31105
결재일자	2014.12.12.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수설비팀장	급수운영과장
양윤선		김태형	12/12 안재엽
협조

설계변경(2차) 심의 위원회 개최 결과보고(광진구 상수도공사(장기계속 단가계약))

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12. 12.

동부수도사업소

급수운영과

설계변경(2차) 심의 위원회 개최 결과보고

(동부수도사업소 광진구 상수도공사(장기계속 단가계약))

우리사업소에서 시행중인『동부수도사업소 광진구 상수도공사(장기계속 단가계약)』에 대한 설계변경(2차) 사전 심의 위원회를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고함.

1				공사현황

가. 공 사 명 : 동부수도사업소 광진구 상수도공사(장기계속 단가계약)

나. 공사규모 : D=13~300㎜, L=2,306m

다. 공사기간 : 2014.08.13. ~ 2014.11.21.

라. 도 급 자 : ***************

마. 물량증감 내역

- 신규공종 : 아스팔트 포장절단(야간) 외 52개 공종

- 물량증감 : 아스팔트 포장절단(100~150㎜적용) 외 199개 공종

- 1차정산 감액 및 누락분 정산 : 작업차량비 감액 및 동파방지 보온재

누락 정산

바. 계약금액 변경내역

구 분	당초(원)	변경(원)	증·감	비 고
총부기금액	653,784,050	653,784,050	변동없음
1차수 금액	400,000,000	399,718,000	감282,000	2014.05.30~2014.12.31
2차수 금액	253,784,050	254,066,050	증282,000	2015.01.01~2015.06.30

2				심의 위원회 개최사항

가. 개최일자 : 2014. 12. 12.(금) 17:00

나. 개최장소 : 3층 회의실

다. 참석위원 : 급수운영과장 외 5명

라. 검토내용

- 신규공종 및 시공물량 증·감에 따른 설계변경 적정성 검토

마. 검토결과 : 위 검토내용에 대하여 적정하다는 심의의견을 제시함.

3				향후계획

가. 위와 같이 설계변경 심의 위원회 개최결과 심의위원 모두 적정하다고 의견을 제시하였으므로, 이를 설계변경 내역에 반영하여 본청 재무과에 변경계약 의뢰하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 설계변경 심의 의뢰서 1부.

2. 설계변경 사전심의 의결서 1부.  끝.