문서번호	기전과-8687
결재일자	2014.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	성동도로사업소장
채희준		代이광만	12/12 정진오
협조
	주무관		차준원

『교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

설계변경 검토 보고(1차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

성동도로사업소

(기  전  과)

『교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

설계변경 검토 보고(1차)

『2014년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)의 예산의 효율적 사용을 위하여 설계변경을 추진코저 합니다.

관련근거

○ 2014년 교통안전시설물 재배정예산 원인행위 및 집행철저

교통운영과-18107(2014.08.30)호

○ 교통개선사업 예산집행 계획 : 기전과-4593(2014.07.01.)호

○ 1차 설계변경 요청 : 건영 본 2014-190(2014.12.12)호

공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014. 03. 18 ~ 2015. 02. 28

○ 도 급 자 : 세광메탈 대표 최정임

○ 도 급 비 : 57,168,566원

○ 감 리 사 : ㈜건영이앤씨

예산집행 계획

○ 교통안전표지 예산의 품의가능 금액(11,665천원) 및 교통 사고 잦은곳(장한평역) 안전표지판 설치(5,070천원)공사분에 대하여 도급비로 집행하고자 합니다

설계변경 현황

○ 설계변경 사유 : 시경찰청 규제로 인한 물량 증가, 노후 교통안전시설물 정비에 따른 작업물량 증감 및 추후 공사 예상 물량에(2014년 12월~2015년 2월분) 대한 예산범위 내에서 증액하여 설계변경코저 함

○ 도급비 변경내용

구 분	도 급 비		변 경 사 유	비 고 (증 감)
	당 초	변 경
2014년 교통안전표지 유지보수공사	57,168,566원	73,903,000원	물량 증감에 따른 금액변경	증)16,734,434

○ 주요공종 변경 내용

공 종	교통안전표지 유지보수공사(연간단가)			비 고
	변경전	변경후	증감
교통표지판 신설	47	280	233	시공물량 변경
교통표지판 교체	47	138	91	“
철주 및 편주	101	89	△12	“

○ 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통개선 및 안전

관리 강화, 교통안전표지 설치 및 개선, 시설비(401-01)

교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통개선 및 안전

관리 강화, 교통사고 잦은곳 개선, 시설비(401-01) : 5,070,000원

조치의견

○ 상기와 같이 2014년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)에 대하여 설계변경하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 감리원 실정보고서 각 1부. 끝.