문서번호	정보통신보안담당관-20733
결재일자	2014.12.12.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정보통신기획팀장	정보통신보안담당관
이명원		이방우	12/12 박웅수
협조

「공공 무선인터넷(WiFi) 구축사업」

설치자재 및 지역 변경보고

2014. 12

정보통신보안담당관

「공공 무선인터넷(WiFi) 구축사업」

설치자재 및 지역 변경보고

공공 무선인터넷(WiFi) 구축사업을 시행중인바, 당초 설치장소의 환경변화로 AP 설치가 불가능하여 일부 구축지역 및 설치내역을 변경하여 설치공사를 수행하고자 함.

Ⅰ				사업개요

□ 사 업 명 : 공공 무선인터넷(WiFi) 구축사업

□ 사업규모 (625,100천원)

○ 관제시스템 행정, 공공 분리 및 고도화

○ 주요 운영시스템 이중화 및 WiFi Zone 안내 홈페이지 구축

○ 시설공사 및 X․Y 좌표추출 및 엠블럼 부착

○ 무선안테나 설치 : 173지역 487AP

유 형		지 역	AP 수량	비 고
계		173	487
공 공	소 계	165	387	이동통신3사 자체 구축 143AP
	전통시장	19	52
	공 원	96	216
	관광명소	2	8
	주요거리	34	79
	광 장, 문화시설	14	32
행 정	소 계	8	100
	서북병원	1	10
	은평병원	1	7
	은평 어린이발달센터	1	13
	한양도성 순성안내소	1	11
	몽촌역사관	1	13
	북서울꿈의숲	1	9
	코오롱빌딩(15개부서)	1	34
	서소문청사3동	1	3

□ 계 약 자 : ㈜오션네트웍스

□ 기    간 : ’14. 9. 12 ~ ’15. 1. 9(4개월)

Ⅱ				변경현황

□ 변경내역

○ 당초 173지역 487AP → 변경 174지역 493AP

○ 변경사항

구분	당 초	변 경	사 유
공공	서대문 명지대학, 홍은홍박공원 (2AP)	광진 한마음공원 (2AP)	지향성에서 옴니AP로 설치에 따른 2AP 남음 → 2AP 한마음 공원으로 추가 증설
	동작 어린이도서관 공원 (2AP)	강북 번동 북부시장 (2AP)	공원 자가통신망 광케이블 여유코아 부족
행정	몽촌역사관 (13AP)	다산콜센터 (10AP)	올림픽공원내 문화재 및 도시미관 훼손 등 으로 도로굴착 등 회선 인입불가
	한양도성순성안내소 (11AP)	남산2청사 (20AP)	건물 인테리어공사가 ’14. 11월까지 사업준공을 ’15년 하반기 연기로 인해 AP설치 불가

※ 설치지역 변경도면 : 붙임 1) 참조

□ 설치자재

품 명	규 격	단위	수 량		증 감
			변경 전	변경 후
AP(실내형)	802.11a/g/n 내장형 AP	EA	21	27	증6
PoE 스위치	24포트 10/100/1000	EA	2	3	증1
옥외용함체	300mm*300mm*400mm	EA	2	3	증1
CD 전선관	16mm	m	956	861	감95
중형사각박스	54mm	EA	11	15	증4
UTP 케이블	CAT5e*4P	m	1,195	1,150	감45
RJ45	AMP	EA	48	62	증14
RJ45 캡	일반형	EA	48	62	증14
VPN	site-to-site VPN / Static IP	EA	2	-	감2

□ 정산금액                                                (단위:원)

구 분	금 액		증 감
	변경 전	변경 후
자산취득비	351,211,000	351,403,000	192,000
시설비	217,062,136	216,870,150	△191,986
소계	568,273,136	568,273,150	14
부가가치세	56,827,314	56,827,315	1
계(원단위 절사)	625,100,450	625,100,465	15
정산금액	625,100,450	625,100,450	변동없음

※ 설계변경 내역서 : 붙임 2)

□ 정산방안

❍ 본 사업은「과업지시서 일반조건 제17조 설계변경」에 의거 계약당사자와 합의하에 과업내용을 변경할 수 있는 물품 구매설치 사업임.

❍ 따라서, 변경물량에 대해 계약대상자와 합의하여 AP설치 시행

Ⅲ				향후계획

□ 시장, 공원 등 2개 지역 AP 설치   :‘14.12.15 ~ 12.17

□ 공공기관 등 2개 지역 AP 설치  :‘14.12.15 ~ 12.19

□ 종합검수 및 준공               :‘15. 1. 9 ~ 1.23

붙 임 : 1. 설치지역 변경도면 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 주간 공정회의 현안사항 보고 1부.  끝