문서번호	시설관리과-31243
결재일자	2014.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김헌중		최재영	12/12 이시우
협 조

물량 증.감 발생보고(용마배수지 구조물 보수 보강공사)

2014. 12

물량 증.감 발생 보고

2014년 용마배수지 구조물 보수 보강 공사에 대하여 물량 증.감  사항이 발생되어 다음과 같이 보고합니다.

▢ 공사현황

◯ 공   사   명 : 용마배수지 구조물 보수 보강공사

◯ 계 약 기 간 : 2014. 10. 31 ~ 2014. 12. 29

◯ 계 약 금 액 : 199,193,700원

◯ 계   약   자 : 뉴콘이엔지(주) 대표 김용기

◯ 공 사 개 요 : 철근노출 단면복구 137㎡, 재료분리 단면복구 23㎡, 균열보수 748㎡

도막방수 684㎡

▢ 보고 내용

- 용마배수지 작업도중 철근노출 부분을 완전하게 제거하기 위해 코아 작업을

시행하는 과정에서  2지는 당초 설계면적보다 시공면적이 6㎡ 증가 하였고.

1지는 시공면적이 20㎡증가하였음

- 벽체 도막방수 방수면적

2지----52㎡(증)

1지----32㎡(증)

- 이동식비계 운반 증가.

1.2지----178회(증)

▢ 처리 의견

- 위 보고내용과 같이 물량 증감 부분에 대해여 설계에 반영하여 변경함이

가하다고 사료됨,끝.