투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(제1회) 시행(2014년 노후포장도로정비 노면표시공사-서부)

우리사업소에서 시행 중인 『2014년 노후포장도로정비 노면표시공사-서부 』에

대하여 아래와 같이 설계변경(1회)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 노후포장도로정비 노면표시공사-서부

나. 공사기간 : 2014.05.12 ∼ 2014.12.31

다. 도 급 자 : 리인건설 대표 김장우

라. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감	비 고
총공사비	419,680,750	515,805,900	증)96,125,150
도 급 비	200,094,750	263,736,000	증)63,641,250
관 급 비	215,586,000	252,069,900	증)36,483,900
이 전 비	4,000,000	0	감)4,000,000

마. 설계변경 사유

1) 포장도로 정비공사 물량 변경에 따른 노면표시물량 증가

바. 예산과목

1) 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속시설물관리(도시개발),

노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1) 설계변경 내역서(제1회) 1부.

2) 설계변경 검토 보고서(제1회) 1부.

3) 제비율 검증 1부.  끝.

주무관	최정필		도로보수과장	이규철		서부도로사업소장	12/12 김만수
협조자	주무관	이상하		주무관	이경남		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-11159	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울 마포구 가양대로 203	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8355	/전송		/	jp2575@seoul.go.kr	/	대시민공개