투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	준공기한 연기요청

우리사업소에서 시행하고 있는 『석촌지하차도 긴급 정밀안전진단용역』과 관련하여 다음과 같이 준공기한 연기를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 석촌지하차도 긴급 정밀안전진단용역

나. 용역사 : ㈜한국구조물안전연구원 대표 이채규

다. 계약금액 : 142,800,000원

라. 준공기한 변경 사항

공사명	공사기간		비고
	당 초	변 경
석촌지하차도 긴급 정밀안전진단용역	2014.09.01~2014.12.31	2014.09.01~2015.02.28

마. 준공기한 연기 사유

- 정밀안전진단용역 시행중 동절기 시설물 손상상태 점검 및 유관기관 자료 검토와 기술심의 소요기간(40일)에 따른 절대공기 부족

바. 연기 귀책 소재 : 동부도로사업소

사. 지체상금 부과 여부 : 미부과.

붙임 : 1) 준공기한 연기 검토보고 및 연기의뢰서 각1부.

2) 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김호규		시설보수과장	12/12 박용선
협조자
시행	시설보수과-4794	(		)	접수		(		)
우	135-834	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2040-0370	/전송	02)2040-0308	/	khguy123@seoul.go.kr	/	대시민공개