투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)	토목3팀장
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 공사기간 변경 승인 통보(장지교삼거리 입체화시설)

1. 도로보수과-4597(2012.07.30)호 및 SH공사 토목3팀-6117 (2014.13.09)호와 관련입니다.

2. 서울특별시 SH공사에서 시행하고 있는 『장지교삼거리 입체화시설 건설공사 교통안전시설물 설치공사(노면)』원인자부담 공사와 관련하여 다음과 같이 공사기간 변경을 승인하오니,

3. 원인자는 『원인자 준수사항』 및 『노면표시 시방서』에 의거 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며, 유관기관에서는 본 승인 통보내용을 참고하시기 바랍니다.

가. 변경사항

공사명	구분	설계사	감리사	시공사	공사기간 변경
					당초	변경
장지교삼거리 입체화시설 건설공사 교통안전시설물 설치공사(노면)	노면표시	도로교통공단	도로교통공단	㈜창희이엔에스	‘12.07.30 ~'14.09.30	‘12.07.30 ~ '16.03.31

나. 변경사유 : 공사부지 미확보에 등에 따른 공사기간 연장.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	SH공사사장,송파구청장(녹색교통과장),서울송파경찰서장(교통과장),서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
주무관	김종섭		주무관	박일연		도로보수과장	12/12 손수희
협조자
시행	도로보수과-7386	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0352	/전송	02-2040-0307	/	resta2002@seoul.go.kr	/	대시민공개