기  성  보  고  서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	박학중	손종백	12/12 이자원

명에 의하여 ‘14년 양천, 강서, 구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속) 기성금 신청(6차) 현황을 아래와 같이 보고합니다.

2014.   12.

보고자 : 지방시설주사보   박 학 중

강서수도사업소장 귀하

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2014년 양천,강서,구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속공사)

나. 착 공 일 : 2014. 5. 19

다. 준공기한 : 2015. 6. 30

라. 도 급 액 : 2,555,653,790원

마. 도 급 자 : 상협건설, 대표 주 상 호

2. 기성금 신청현황

가. 위        치 : 강서구 화곡본동 24-48번지 153건

나. 금회공사기간 : 2014. 11. 1 ~ 2014. 11. 22(22일간)

다. 기 성 금 액 : 168,641,000원

라. 예 산 과 목 : 상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 기타교체비 (상수도관 누수복구)

상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 수선교체비(불용관정비)

3. 기성 내역

가. 기성내역                                                         (단위: 원)

구 분	계 약 금 액	전회까지 기성금액	금회 기성금액	금회까지 누계금액	잔 액
도 급 액	2,555,653,790	1,127,049,000	168,641,000	1,295,690,000	1,259,963,790

나. 누수복구개요                                                  (단위: 개소)

계	급수관	송･배수관	비 고(기타)
154	103	15	36

다. 세부내역

연번	구 경	공사개요(m)	급수관 연락공사(개소)	비 고
계	D=15~50mm	254.1	79
1	D=15mm	51.8	35
2	D=20mm	103.1	17
3	D=25mm	41.7	11
4	D=30mm	23.7	7
5	D=40mm	21.6	7
6	D=50mm	12.2	2

4. 처리 의견

상기와 같이 2014년 긴급누수복구 6차 기성을 시행코자 합니다.

붙  임  1. 누수복구대장 1부

2. 기성내역서 1부.  끝.