문서번호	도로계획과-16295
결재일자	2014.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
전문관	도로정책팀장	도로계획과장
박찬규	이승석	12/12 형태경

준공기한 연기 보고

(한양도성안 도로공간재편 시범사업 기본 및 실시설계용역)

2014. 12

도로계획과

준공기한 연기 보고

1. 용역개요

가. 용 역 명 : 한양도성안 도로공간재편 시범사업 기본 및 실시설계 용역

나. 계 약 자 : ㈜태조엔지니어링 대표 한명식

다. 계약금액 : 금육천이백이십일만팔천오백원정(￦62,218,500)

라. 계약년월일 : 2014.  5. 13.

마. 착수년월일 : 2014.  5. 13.

바. 준공예정일 : 2014.12. 31.

2. 보고내용

○ 위 용역에 대한 과업기간을 다음과 같이 연기하고자 합니다.

가. 연기 준공기한

- 당  초 : 2014년 12월 31일

- 변  경 : 2015년   2월 28일

나. 연기 귀책사유 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- ˊ14.11.18. 우정국로 시범사업의 주요 쟁점사항 시장님 보고시 우정국로 시범사업은 세종대로 보행환경개선사업, 견지동 역사문화관광자원 조성사업과 연계하여 검토 추진토록 요청되어,

- 주변 다른 사업의 추진 내용, 일정 및 상황 등을 고려한 최적의 설계를 통한 시범사업 추진을 위하여 설계기간 연기 필요

2014.  12.

보고자 : 지방시설주사 박 찬 규  (인)