문서번호	방재시설부-13233
결재일자	2014.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
한종수		김흥근	12/12 임춘근
협조

용허리 빗물저류조 설치공사 폐기물처리용역

설계변경(총괄2회) 검토 보고

2014.  12.

서울특별시도시기반시설본부

(방재시설부)

『용허리 빗물저류조 설치공사 폐기물처리용역」

설계변경(총괄2회) 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인「용허리 빗물저류조 설치공사 폐기물처리용역」에 대해 공사시 추가로 발생한 폐기물에 대하여 폐기물 처리용역 설계변경을 시행코자 보고드림.

□ 관련근거

○ 잠원2감 2014-296호(ʹ14.12.5) : 폐기물처리용역 설계변경 검토보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 용허리 빗물저류조 설치공사 폐기물처리용역

○ 위     치 : 용허리 근린공원내

○ 규     모 : 폐아스콘 및 폐콘크리트 등 운반․처리

- 폐콘크리트 : 1,451톤, 폐아스콘 : 905톤, 운반 및 처리 : 2,356톤

○ 용역기간 : ʹ13. 2. 1 ~ ʹ14. 12. 31

○ 총용역비 : 금59,950,000원

○ 용 역 사 : ㈜해솔산업개발 대표 유 길 문

□ 감리보고 내용

○ 폐기물 물량 최종정산 내용

(단위: 톤)

구 분	폐콘크리트			폐아스콘			증 감 사 유
	당초	변경	증 감	당초	변경	증 감
계	1,451	1,932	증481	905	1,474	증569
소계	243	834	증591	62	631	증569
기실정보고	204	248	증44				유출관로 및 L형측구 설치(토목부-17125)
	39	39	-	62	71	증9	U형측구 추가설치(방재안전시설부-4080)
				-	47	증47	부지내 상수도이설(방재시설부-519)
				-	65	증65	지하매설물 조사(방재시설부-2686)
	-	79	증79	-	346	증346	횡단 유입박스 설치(방재시설부-8224)
	-	154	증154				폐유저장시설 처리(방재시설부-11376)
	-	314	증314	-	102	증102	토출관로 개선공사(방재시설부-11312)
소계	1,208	1,098	감110	843	843		-
신규보고	228	118	감110				가설사무실 철거물량 변경
	59	59	-				세륜시설
	16	16	-				기존하수관 철거
				843	843		포장공
	905	905					매립 하수관 등 물량정산

○ 폐기물 처리 물량 및 처리비 현황

(단위: 톤)

구 분	당 초	변 경	증감	비 고
폐콘크리트	1,451	1,932	(증)481
폐아스콘	905	1,474	(증)569
운 반 량	2,356	3,406	(증)1,050
폐기물처리 용역비	59,950천원	86,911천원	(증)26,961천원

□ 조치의견

○ 상기 책임감리 보고내용과 같이 공사시 추가로 발생한 폐기물에 대하여 폐기물     처리용역에 반영함이 타당하므로, 본 공사 시행에 차질이 없도록 설계변경 시     반영코자 함.

붙임 : 감리단 검토보고  1부.  끝