함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(2차) 심의 위원회 개최(광진구 상수도공사)

우리사업소에서 시행중인 아래 공사에 대하여 설계변경(2차) 심의위원회를 개최하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 동부수도사업소 광진구 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사기간 : 2014.08.13. ~ 2014.11.21.

다. 계약상대자 : ****************

라. 설계변경사유 : 차수별 금액변경 및 계약물량 증․감, 신규공종 발생

마. 금액내역

구 분	당초	변경	비 고
총부기금액	653,784,050	653,784,050	총부기금액 변경없음
1차수 금액	***********	***********	2014.05.30~2014.12.31
2차수 금액	***********	***********	2015.01.01~2015.06.30

바. 심의내용 : 설계변경 적정성 여부

사. 심의일시 : 2014.12.12.(금) 3층 회의실

따로붙임 : 1. 설계변경 심의 의뢰서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

★주무관	양윤선		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	전결 12/12 안재엽
협조자
시행	급수운영과-31035	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동 142-1)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-2747	/전송	3146-2789	/		/	부분공개