문서번호	토목부-24806
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목설계과장	토목부장
임홍필		조성만	12/15 노우성
협조

설계변경 및 준공기한 연기 보고

(노원교 연결램프 설치 및 수락고가 확장 기본및실시설계)

2014.12.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

설계변경 및 준공기한 연기보고

우리부에서 시행중인 『노원교 연결램프 설치 및 수락고가 확장 기본 및 실시설계 용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 준공기한 연기 시행코자 합니다.

용역 현황

용 역 명 : 노원교 연결램프 설치 및 수락고가 확장 기본 및 실시설계

위    치 : 노원구 상계동 수락고가 주변(상계동 1101-2번지 ~ 상계동 1256번지)

사업내용 : 도로확장 폭 6차로, 연장770m

- 노원교 연결램프 설치(폭5.25m, 연장143m)

- 수락고가 확장 폭21m(4차로), 연장300m → 폭23.8m(6차로), 연장300m

설계기간 : 2014. 3.27. ~ 2015. 1.22.

계약금액 : 279,180,000원

설 계 사 : 동부엔지니어링(주), ㈜동일기술공사, ㈜정호이앤씨, ㈜피엔지

설계변경 사유

지하매설물 확인을 위한 줄파기 연장 감소

시추조사시 보링 연장 및 토질시험비 증·감 발생

부가가치세와 손해보험료 증·감발생

설계변경 내용                                         (단위 : 원)

구 분	계약금액(당초)	변경금액(변경)	증․감 금액	비 고
기본및실시설계비	202,582,670	202,582,670
측량비	11,609,747	11,609,747
토질조사 및 시험	19,761,426	18,843,965	감917,461
CG작업비	5,300,000	5,300,000
경제성 검토	6,117,000	6,117,000
인쇄비	3,949,000	3,949,000
공급가액	249,319,843	248,402,382	감917,461
부가가치세	24,931,984	24,840,238	감91,746
손해보험료	1,928,173	1,947,380	증19,207
설계자문비	3,000,000	3,000,000
도급비	279,180,000	278,190,000	감990,000

준공기한 연기

당    초 : ‘14.  3.27. ~ ’15. 1.22.

변    경 : ‘14. 3.27. ~ ’15. 3.22.

지체상금 : 미부과

연기사유

주민설명회(‘14.7.28. ’14.10.30)시 주민건의사항 검토에 따른 설계기간 부족

- 수락고가차도에 방음벽 설치에 따라 동부간선진입교 위치가 중랑천 방향으로 약1.0m이동함에 따른 측량 및 상세설계 필요.

조치의견

위 보고 내용대로 아래와 같이 설계변경 처리하고자 하며,

- 당초 계약금액 : 279,180,000원

- 변경 계약금액 : 278,190,000원(감액990,000원)

향후 추진예정인 건설기술심의, 설계자문회의, 서울국토관리청과의 하천협의 등 과업추진 일정에 많은 영향을 초래되므로 준공기한을 연기하여 설계용역 수행에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경 및 연기 요청 공문 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 계약서 1부.  끝.